9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 남해군에서 ‘15년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2615년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
도서지역식수원개발사업(남해도)	25,762	13,445	2,084	10,233	2017	2009 (도심사)	67
남해읍하수관거 정비공사(제2단계)	19,027	9,517	3,804	5,706	2016	2010 (도심사)	95
서상~남산간 도로 확포장공사	33,400	24,600	4,400	4,400	2016	2010 (도심사)	78
도서지역식수원개발사업(남해도3)	2,722	136	1,000	1,586	2016	2011 (자체심사)	50
도서지역식수원개발사업(창선도2)	2,333	114	714	1,475	2016	2011 (자체심사)	90
봉황산 나래숲 공원조성	5,827	4,124	65	1,638	2016	2011 (도심사)	60%
당항마을 하수처리시설	5,462	286	1,705	3,471	2016	2013 (도심사)	90
원천마을 하수처리시설	3,349	286	1,000	2,063	2016	2013 (자체심사)	100
설리대명리조트 기반시설 정비	2,700	327	1,403	970	2016	2014 (자체심사)	82.5
남해다이어트 보물섬 조성	33,600	393	-	33,207	2017	2012 (도심사)	10
남해대교 레인보우 전망대	5,604	7	413	5,183	2017	2013 (도심사)	21
송정관광지 생태주차장 부지매입	4,000	665	1,060	2,275	2017	2013 (도심사)	80
남해문화관광 단지 “힐링빌리지 조성“	23,300	1,882	1,015	20,403	2017	2013 (도심사)	15
석평소하천정비	4,800	3,338	1,462	-	2015	2013 (자체심사)	100
복곡소하천정비	2,300	856	1,444	-	2015	2014 (자체심사)	100
남해읍 도시계획도로 (소로2-53호)개설	2,200	-	1,200	1,000	2017	2015 (자체심사)	0

9-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

도서지역식수원개발사업(남해도)

담당자

상하수도사업소 박문두

(☎860-3323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.5 ~ 2017. 12

○ 위치 : 남해도 일원

○ 사업규모 : 관로매설 L=147.6km, 배수지 2개소, 가압장 5개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,762백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	25,762	13,445	2,084	2,143	8,090
국 비	18,037	9,491	1,459	1,500	5,587
시 도 비	2,319	1,176	188	193	762
시군구비	5,406	2,778	437	450	1,741
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

❍ 2011. 5월 : 공사 착수

❍ 2012. 9월 : 1차분 준공 - 창선면 급수구역

❍ 2013. 3월 : 2차분 준공 - 상주면 급수구역

❍ 2014. 3월 : 3차분 준공 - 미조면 급수구역

❍ 2015. 3월 : 4차분 준공 - 이동면 급수구역

❍ 2016. 1월 : 5차분 준공 - 이동면, 상주면 급수구역

❍ 2016. 2월 : 6차분 착공 - 삼동면 급수구역

□ 향후계획

❍ 2017.  1월 : 7차분 착공 - 동천급수구역

❍ 2018. 12월 : 총괄분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

남해읍 하수관거정비사업(제2단계)

담당자

상하수도사업소 강석주

(☎860-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해읍 시가지 외 15개 지구에서 발생하는 오수가 미처리 상태로 방류되어       수질오염을 가속시키고 있으므로 지역실정에 적합한 하수관거 시설을 설치하여       공공수역 수질개선과 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2016

○ 위 치 : 남해군 남해읍 일원

○ 규 모 : 하수관거 L=113.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,027백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	19,027	9,517	3,804	5,706	-
국 비	13,318	6,662	2,663	9,334	-
시 도 비
시군구비	5,709	2,855	1,140	1,712	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

❍ 남해읍 하수관거정비사업(2단계) 착공 : 2008. 06. 03

❍ 9차분 까지 착공 및 준공 : 2008.06 ∼ 2016. 08

□ 향후계획

❍ 11차분공사 착공 :  2016.01

○ 2016년 8월 : 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

서상~남산간 도로 확포장공사

담당자

건설교통과 정성훈

(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해스포츠파크 주 진입도로인 서상～남해읍간 도로 확․포장으로 매년

늘어가고 있는 전국단위 체육대회 개최에 따른 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010～2016

○ 위 치 : 경남 남해군 서면 서상리 ~ 남해읍 평리일원

○ 규 모 : 도로 확포장 공사 L=3.26km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	33,400	24,600	4,400	4,400
국 비
시 도 비	12,000	7,000	3,000	2,000
시군구비	22,400	17,600	1,400	2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   78 %)

○ 2010.  4월 ~ 2011. 4월 : 기본 및 실시설계

○ 2011.  9월 : 사업발주(조달청 입찰)

- 시공업체 : 현대산업개발(주), 동흥종합건설(주) 공동도급

○ 2013.  5월 ~ 2016년 6월 : 1~4차분 준공

○ 2016년 3월 : 5차분 착공

□ 향후계획

○ 2016년 12월 : 총공사 완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

도서지역식수원개발사업(남해도3)

담당자

상하수도사업소 박문두

(☎860-3323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

□ 사업개요

○ 기간 : 2014. 1 ~ 2016. 12

○ 위치 : 삼동면 동천리 일원

○ 사업규모 : 배수지 설치 1,000톤, 관로매설 3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,722백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,722	136	1,000	1,586	-
국 비	1,905	95	700	1,110	-
시 도 비	245	12	90	143	-
시군구비	572	29	210	333	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

❍ 2014. 9월 : 실시설계용역 착수

❍ 2015. 2월 : 1차분 착공

❍ 2016. 1월 : 2차분 착공

□ 향후계획

❍ 2017. 10월 : 총괄분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

도서지역식수원개발사업(창선도2)

담당자

상하수도사업소 박문두

(☎860-3323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

□ 사업개요

○ 기간 : 2014.1 ~ 2016. 12

○ 위치 : 창선도 일원(고순~신흥)

○ 사업규모 : 관로매설 L=8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,333백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,333	144	714	1,475	-
국 비	1,633	101	500	1,033	-
시 도 비	210	13	64	133	-
시군구비	490	30	150	309	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

❍ 2014. 9월 : 실시설계용역 착수

❍ 2015. 2월 : 1차분 착공

❍ 2016. 1월 : 2차분 착공

□ 향후계획

❍ 2016. 12월 : 총괄분 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

봉황산 나래숲 공원조성

담당자

환경녹지과 하상균(☎860-3653)

□ 사업목적 및 필요성

○ 봉황산 나래숲 조성을 통하여 지역 주민의 휴식처 및 문화공간의 제공과 우리군의 특성에 맞는 테마 생활권형 숲 공원을 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2011년 ~ 2016년

○ 위치 : 남해군 남해읍 아산리 산144-7번지 일원(근린공원)

○ 사업규모 : 공원 303,920㎥

⇒ 산책로, 꽃향기마루터, 전망대, 놀이체험장, 향기원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,827백만원(사업비 2,127, 보상비 3,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,827	4,124	65	1,638
국 비	991	297	12	682
시 도 비	298	90	3	205
시군구비	4,538	3,737	50	751

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘11. 03 : 사전재해영향성, 사전환경성검토 협의

○ ‘12. 02 : 봉황산 나래숲 조성 실시설계 용역

○ ‘13. 07 : 사업발주 및 계약(총괄 및 1차분 산책로 조성)

○ ‘14. 06 : 2차분 공사 계약(놀이체험장, 향기원 등)

○ ‘14. 07 : 문화재 조사에 따른 공사중지

○ ‘14. 07 ~ ‘15. 09 : 문화재 지표조사, 시굴조사, 정밀조사 실시

○ ‘15. 10 ~ : 공사재개(꽃향기마루터 및 하늘마루 공사완료, 산책로 60%완료)

※ ‘12년~15년 : 부지매입(56필지 8.1ha/36.07억원)

□ 향후계획

○ ‘15. 09 ~ 12월 : 공사추진(산책로, 놀이체험장, 향기원 등)

사업명

당항마을 하수처리시설

담당자

상하수도사업소 강석주

(☎860-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○남면 당항리 일원에서 발생하는 오수가 미처리상태로 남해로 방류되어         수질오염을 가중시키고 있어 방류해역의 수질오염을 저감시키고, 쾌적한       생활환경을 조성하기 위해 하수처리시설 및 하수관거 정비공사가 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 남해군 남면 당항리 일원

○ 규 모 : 하수처리장 200톤/일, 하수관거 L=12km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,036백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,462	286	1,705	3,471	-
국 비	3,823	200	1,194	2,430	-
시 도 비	819,5	43	256	521	-
시군구비	819,5	43	255	520	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013.12.30 : 착공

○ 2013.12.30 ~ 2016.6 : 착공 및 1단계 사업 완료

□ 향후계획

○ 2016.09. : 정부추경 후 2단계 사업 착공 예정

□ 사업변경 내역

○해당없음

사업명

원천마을 하수처리시설

담당자

상하수도사업소 강석주

(☎860-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이동면 원천마을 일원에서 발생하는 오수가 미처리상태로 해안으로         유입되어 수질오염을 가중시키고 있어 방류해역의 수질오염을 저감시키고,     쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 하수처리시설 및 하수관거 정비공사가 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 남해군 이동면 원천마을 일원

○ 규 모 : 하수처리장 150톤/일, 하수관거 L=2.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,349백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,349	286	1,000	2,063
국 비	2,344	200	700	1,441
시 도 비	503	43	150	311
시군구비	502	43	150	311
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 12 : 착공

○ 2016.  6 : 준공

□ 향후계획

○ 2016. 06. 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

설리대명리조트 기반시설 정비

담당자

경제과 박종건(☎860-3230)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광휴양도시 정착을 위한 대명리조트 기반시설 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 3

○ 위 치 : 미조면 송정리 설리마을 일원

○ 규 모 : 접속도로 선형개량 : L=610, B=9.0

진입도로 개설 : L=210, B=13(상수도시설 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,700	327	1,403	970	-
국 비
시 도 비	1,500	163	786	551
시군구비	1,200	164	617	419
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82.5%)

○ 접속도로 선형개량공사 준공(100%)

○ 진입도로 개설공사 추진중(진도 65%)

□ 향후계획

○ 대명리조트 입지에 필요한 기반시설 준공 : ’16. 11

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

남해 다이어트 보물섬 조성

담당자

문화관광과 조진갑

(☎860-8614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시의 바쁜 일상을 벗어나 생태계가 잘 보전된 섬으로 들어가

육체적 건강과 정신적 충만을 이룰 수 있는 특화된 생태 섬 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년  ~  2017년

○ 위 치 : 미조면 미조리 조도, 호도 일원

○ 규 모 : 191,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	33,600	393		2,000	31,207
국 비	10,000	196		1,000	8,804
시 도 비	3,000	59		300	2,641
시군구비	10,600	138		700	9,762
지 방 채
민간자본	10,000				10,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2010. 5. : 남해안권 발전 종합계획 결정 고시

○ 2012. 4. : 지방재정 투융자심사(경남도)

○ 2015.11. : 중앙도시계획위원회 수정 제시안 저건부 수용

○ 2015.12. : 구역지정 및 개발계획 승인(국토교통부)

○ 2016. 1. : 구역지정 및 개발계획 고시(국토교통부)

□ 향후계획

○ 2016. 9. : 1차 사업 착수(접안시설) 및 소규모 환경영향평가 협의

○ 2017.12. : 공사준공

○ 2018. 6. : 시설 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

■ 당초

△ 사업규모

◦ 조도 : 계획면적(143,523㎡)

- 공공 : 접안시설, 다이어트센터, 전망대, 해안산책로, 경관정비

- 민자 : 해수스파, 스파빌라, 수상가옥

◦ 호도 : 계획면적(96,748㎡)

- 공공 : 접안시설, 스포츠관리시설, 전망대, 해안산책로, 경관정비

- 민자 : 짚트랙, 서바이벌게임, 암벽타기

△ 총사업비 : 16,000백만원

△ 사업기간 : 2012년 ～2015년

■ 변경

△ 사업규모

◦ A=191천㎡(조도 82천㎡, 호도 109천㎡)

◦ 공공 : 다이어트센터, 치유의 숲, 탐방로, 전망대, 명상원, 접안시설 등

◦ 민간 : 숙박시설(휴양콘도미니엄, 빌라형 펜션)

△ 총사업비 : 33,600백만원

△ 사업기간 : 2014년 ～2017년

사업명

남해대교 레인보우 전망대

담당자

문화관광과 김태석

(☎860-8613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제2남해대교 개통에 따라 노량공원 일대 기존 남해대교를 통해 유입되던 관광수요 격감이 우려됨에 따라 노량, 감암마을을 어우르는 새로운 관광 인프라 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 남해군 설천면 노량리 산32-40번지 일원

○ 규 모 : 전망대 1개소,  탐방로 L=1,500m B=1.5, 주차장 A=7,600㎡,

데크로드 : L=600m, B=2.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,604백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,604	7	413	2,340	2,844
국 비	2,802	3	242	1,135	1,422
시 도 비	840	1	16	396	427
시군구비	1,962	3	155	809	995
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ 2013. 05 : 지방재정 투자심사

○ 2015. 08 : 도로점용허가 완료

○ 2015. 08 : 한려해상국립공원 계획 변경 고시

○ 2015. 10 : 레인보우전망대(데크로드) 공사 착공

○ 2016. 03 : 공원사업 시행허가 완료

○ 2016. 05 : 레인보우전망대(데크로드) 공사 준공

○ 2016. 08 : 레인보우전망대(탐방로, 전망대) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 12 : 남해대교 레인보우전망대 건립사업 완료

□ 사업변경 내역

■ 당초

△ 사업규모

◦ 전망대(A=945㎡, 3층) : 조망공간, 카페테리아, 홍보관 등

◦ 탐방로 : 데크로드 : L=600m, B=2.0m, 숲길정비 : L=1,500m, B=3.0m

△ 총사업비 : 5,200백만원

△ 사업기간 : 2014년 ～2016년

■ 변경

△ 사업규모 : 전망대 1개소,  탐방로 L=1,500m B=1.5, 주차장 A=7,600㎡,

데크로드 : L=600m, B=2.0m

△ 총사업비 : 5,604백만원

△ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

사업명

송정관광지 생태주차장 부지매입

담당자

문화관광과 문민근

(☎860-8616)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성된 송정솔바람해변 생태주차장의 편입부지 매입으로 고질적인

민원 해소 및 생태주차장 활용 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년  ~  2017년

○ 위 치 : 남해군 미조면 송정리 1168-4번지 일원

○ 규 모 : 32필지(A=21,725㎡ )

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,000	665	1,060	600	1,675
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	665	1,060	600	1,675
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2014년 :  8필지 4,957㎡,   665백만원

○ 2015년 : 10필지 7,949㎡,  1,060백만원

○ 2016년 :  5필지 2,356㎡,   318백만원

□ 향후계획

○ 2017년 10필지 6,463㎡ 1,020백만원(5명)

○ 토지소유자 현시가 가격으로 보상 요구

○ 토지소유자 협의 매수 요청

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

남해문화관광단지“힐링빌리지”

조성사업

담당자

미래전략사업단 이경재

(☎860-3624)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 관광수요 대응 및 새로운 관광 패러다임 변화에 부응하는 친환경

테마빌리지 조성을 통한 새로운 관광상품 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 경남 남해군 창선면 진동리 654번지 일원

○ 규 모 : 힐링센터, 다목적 커뮤니티 센터, 공원, 산책로, 전망대 및

친환경주택 25동, 휴양리조트 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	23,300	1,882	1,015	4,765	15,638
국 비	6,000	0	10	590	5,400
시 도 비	1,800	0	5	175	1,620
시군구비	15,500	1,882	1,000	4,000	8,618

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

❍ 2012.06 사업타당성조사 및 기본계획 수립

❍ 2013.08 지구단위계획 수립 용역 발주

❍ 2013.12 복합형 지구단위계획 수립 용역 착수

❍ 2014.02 보상협의회 개최 및 감정평가 실시

❍ 2015.01 남해 힐링빌리지 조성사업 설계공모

❍ 2015.05 설계공모 당선작 선정 및 실시설계 용역발주

❍ 2015.06 실시설계용역 착수

❍ 2016.08 부지보상 협의(97.4% 보상협의 완료)

□ 향후계획

○ ‘16.  9월 : 실시설계용역 완료

○ ‘16. 10월 : 복합형(관광+주거)지구단위계획 결정 고시

○ ‘17.  1월 : 인허가 협의 및 실시계획인가 고시

○ ‘17.  3월 : 사업착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

석평소하천정비

담당자

안전총괄과 권우종

(☎860-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 석평소하천은 마을을 관통하고, 단면이 협소한 미정비된 소하천으로 남해군소하천정비종합계획에 의한 체계적인 하천정비를 통해 재해로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년(3년간)

○ 위 치 : 남해군 이동면 석평리 일원

○ 규 모 : 하천정비 L=1.56km, B=8~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,800	3,338	1,462
국 비	2,400	1,669	731
시 도 비
시군구비	2,400	1,669	731
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13. 5월 : 총괄분 및 1차분 착공

○ ‘14. 1월 : 1차분 준공

○ ‘14. 12월 : 2차분 준공

○ ‘15. 8월 : 3차분 및 총괄분 준공

□ 향후계획

○ 하천시설물 상시 유지관리 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

복곡소하천정비

담당자

안전총괄과 권우종

(☎860-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복곡소하천은 마을내에 위치하고, 단면이 협소한 미정비된 소하천으로 남해군소하천정비종합계획에 의한 체계적인 하천정비를 통해 재해로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2015년(2년간)

○ 위 치 : 남해군 삼동면 봉화리 일원

○ 규 모 : 하천정비 L=0.82km, B=9~12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,300	856	1,444
국 비	1,150	428	722
시 도 비
시군구비	1,150	428	722
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘14. 2월 : 총괄분 및 1차분 착공

○ ‘15. 2월 : 1차분 준공

○ ‘15. 8월 : 2차분 및 총괄분 준공

□ 향후계획

○ 하천시설물 상시 유지관리 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

남해읍도시계획도로(소로2-53호)개설

담당자

도시건축과 박경진

(☎860-3412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해읍 간선도로의 차량정체로 인한 남해읍 외곽도로 중로2-2호와 연결하여 교통량을 분산

○ 도로의 개설로 주민들의 안전한 통행로 확보 및 편익 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 01월 ~ 2017년 12월

○ 위 치 : 경남 남해군 남해읍 서변리 일원(소로2-53호)

○ 규 모 : 도로개설 L=310m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,200	-		1,200	1,000
국 비		-
시 도 비	1,100			600	500
시군구비	1,100	-		600	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2012년 05월: 단계별 집행계획 1단계 지정

□ 향후계획

○ 2016년 01월~12월: 감정평가 및 부지보상

○ 2017년 01월~03월: 실시설계 실시

○ 2017년 03월~12월: 도로개설공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

9-2. 지방채 발행사업

우리 남해군에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-3. 민간투자사업

우리 남해군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	해		당		없		음
BTO	해		당		없		음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유를 설명