[별지 7]

개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

남해군 생활폐기물 매립시설 조성사업

담당자

환경물관리단 신재욱(☎860-3278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안정적인 생활폐기물 수거 및 처리를 위해 현 매립시설의 사용종료 전에 신규 매립시설 조성 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024

○ 위 치 : 경남 남해군 남해읍 평현리 1840번지 일원

○ 규 모 : 지붕형 매립시설 조성 1식(용량 : 127,648㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,763백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,763	0	0	667	19,096
국 비	3,939	0	0	200	3,739
시 도 비
시군구비	15,824	0	0	467	15,357
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2021. 6 : 군 계획시설(폐기물처리시설) 결정 용역 착공

○ 2021. 8 : 한국환경공단 위탁시공 협약

○ 2022. 6 : 실시설계 용역 계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2022. 11 : 실시설계 VE

○ 2022. 12 : 설계 자문위원회

□ 사업변경 내역

○ 총사업비

- 당초 : 190억원(국비 46, 시군비 144) 2021년 투자심사시

- 변경 : 197억원(국비 39, 시군비 158) 2022년 국고보조금 확정시 변경

사업명

계획공모형 지역관광개발사업

담당자

문화관광과 김연경

(☎860-8613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 독일마을은 파독 광부와 간호사가 귀향하여 정착한 마을이라는 지역 특유의 스토리가 있는 대한민국 대표 테마마을로 남해의 핵심관광자원으로 조성하여 주변지역과 연계하여 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)

○ 위 치 : 남해군 삼동면 독일마을, 인근마을 연계

○ 규 모 : A=170,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계		200	128	792	11,080
국 비		100	64	396	5,540
시 도 비		30	19	119	1,662
시군구비		70	45	277	3,878
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2021. 5.26. : 계획공모형 지역관광개발사업 공모 최종 선정

○ 2021. 12월 : 계획공모형 지역관광개발사업 기본계획 용역 시행

○ 2022. 1.14. : 계획공모형 지역관광개발사업 기본계획 착수보고회 개최

○ 2022. 2.16. : 독일마을내 민박업체 현장 조사

○ 2022. 4.27. : 계획공모형 사업 공동연수 참석

○ 2022. 6.28. : 계획공모형 지역관광개발사업 용역 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ 2022. 07월 : 기본계획 준공

○ 2022. 08월 : 독일마을 브랜딩, BGM개발 용역 시행

○ 2022. 09월 : 시설 리모델링 실시설계 용역 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

2022년 문화재야행 사업

담당자

문화관광과 신강호(☎860-8634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해읍 일원의 인프라를 이용한 도심지역의 뚜렷한 관광자원 확보 및 ‘유배문화’ 브랜드화하여 남해읍 주민 숙원 해소 및 차별화된 관광자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. 8.(토) ~ 10. 9.(일)

○ 위 치 : 남해향교, 유배문학관 등 남해읍 시가지

○ 규 모 : 유배設경! 외 15개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계		0	0		0
국 비		0	0	80	0
시 도 비		0	0	20	0
시군구비		0	0	100	0
지 방 채		0	0	0	0
민간자본		0	0	0	0
기 타		0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 2022. 3. 문화재 야간 경관 조성 및 프로그램 진행 업체 선정 및 계약

○ 2022. 4. 야간경관 조성 소품(한지등) 등 제작 및 세부 프로그램 조율

○ 2022. 6. 남해향교 야간 관람등 시범설치

도로 통제 등 야행 운영관련 관계기관(단체) 협의

□ 향후계획

○ 2022. 7. 추진단 회의(행사 세부운영 협의 및 업무분장)

방송매체, 온·오프라인을 통한 홍보 및 프로그램 참가자 모집     ○ 2022. 8. 문화재야행 세부프로그램 및 시설 점검·보완

남해읍민 등 관계자 설명회

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 국도비 지원율 확정에 따른 예산 변경

(국 80, 도 30, 군 90 → 국 80, 도 20, 군 100)

사업명

전국 버스king 자랑

담당자

문화관광과강윤택(☎860-8625)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 규모의 버스킹 대회 개최로 2022 남해방문의 해 홍보 및 방문 유도

○ 대회 입상자들이 남해군 대표 관광지에서 릴레이 버스킹을 실시해 방문객

대상 관광남해 이미지 제고 및 지역경제 활성화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 :  2022년 1월 ~2022년 12월

○ 위 치 :  남해군 일원

○ 규 모 :

- 버스킹 대회 개최 : 3회(3월, 6월, 9월)

- 릴레이버스킹우녕ㅇ : 27주간(4~5월, 7~8월, 10~11월 매주 토요일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	180	-	-	180	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 2022. 7. 08(금) : 협상에 의한 계약 체결

□ 향후계획

○ 2022.7.23(토) : 보물섬 전국 버스킹 대회 개최

○ 2022. 8월~11월 : 릴레이 버스킹( 매주 토요일)

□ 사업변경 내역

구분	당초	현재	비고
총사업비	290백만원	180백만원
사업기간	2022.1월~12월	2022.7월~11월
사업규모	버스킹 대회: 3회(3월,6월,9월)	버스킹 대회 : 1회(7월)
	릴레이버스킹 :27주간(4월~11월)	릴레이버스킹 : 16주간(8월~11월)

사업명

2022 남해군 방문의 해 ‘출발 퍼포먼스’

담당자

문화관광과 박진석

(☎860-8603)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2022 남해군 방문의 해를 맞아 장엄하게 그 출발을 알리고 희망찬 새해를 군민‧관광객과 함께 맞이하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. 31 ~ 2022. 1. 1(2일간)

○ 위 치 : 남해읍, 창선면, 삼동면

○ 내 용 : 홍보탑 제막식, 불꽃쇼, 미디어타워 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	150	150	150	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 출발퍼포먼스 전야제(2021.12.31)

① Again 1973 홍보탑 제막식

- 장소 : 남해유배문학관 광장

- 참석 : 기관대표, 주민자치회, 민관협의회 대표, 공식서포터즈 등 50여명

- 내용 : 홍보탑 제막

② 홍보 미디어타워 운영

- 기간 및 장소 : 2021. 12. 29 ~ 2022. 1. 2, 남해유배문학관 광장

- 내용 : 군민대표(방문의 해 관련 단체, 재외향우, 지역신문사)의 희망메세지 송출

③ 타악밴드 라퍼커션 공연 및 퍼레이드

- 장소 : 남해유배문학관 광장 ~ 남해읍시가지

④ 임인년 방문의 해 희망의 불꽃쇼

- 소요시간 및 장소 : 25~30분

- 장소 : 군민체육센터

○ 길거리 문화공연 개최(2022. 1. 1)

- 장소 : 창선면 시가지, 삼동면 독일마을, 남해읍시가지

□ 향후계획 : 행사 완료

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

제42회 대한축구협회장배 전국고교 축구대회

담당자

체육진흥과 지호진(☎860-8683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국단위 대회 개최를 통한 고등부 축구 발전과 선수기량 향상

○ 대회유치를 통한 지역경제 활성화와 스포츠도시 이미지 상승

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. 16. ~ 5. 28. [12일간]

○ 위 치 : 스포츠파크일원

○ 규 모 : 전국 고등부 22개팀

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	127.9		127.9
국 비
시 도 비
시군구비	127.9		127.9
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회 유치 신청 및 승인(대한축구협회)

○ 협약체결(남해군·남해군체육회↔경남축구협회)

○ 보조금 교부신청(보조단체)

○ 보조금 교부결정 및 교부통지(보조단체)

○ 사업 정산

□ 향후계획

○ 전국대회를 유치하기 위해 스포츠마케팅 강화

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

전국고등축구리그 왕중왕전(겸)

제76회 전국고교 축구 선수권 대회

담당자

체육진흥과 지호진(☎860-8683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국단위 대회 개최를 통한 고등부 축구 발전과 선수기량 향상

○ 대회유치를 통한 지역경제 활성화와 스포츠도시 이미지 상승

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8. 2. ~ 8. 13. [12일간]

○ 위 치 : 스포츠파크일원, 상주생활체육공원

○ 규 모 : 전국 고등부 64개팀

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	202.5		202.5
국 비
시 도 비	10		10
시군구비	192.5		192.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대회 유치 신청 및 승인(대한축구협회)

○ 협약체결(남해군·남해군체육회↔경남축구협회)

○ 보조금 교부신청(보조단체)

○ 보조금 교부결정 및 교부통지(보조단체)

○ 사업 정산

□ 향후계획

○ 전국대회를 유치하기 위해 스포츠마케팅 강화

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

상주 행복나눔 문화체육센터 건립

담당자

체육진흥과 정동관(☎860-8662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사계절 전지훈련장으로 활용하고 있는 상주생활체육공원 내실내체육관

건립으로 지속적인 전지 훈련팀 유치 및 지역경제  활성화 (※생활SOC복합화사업)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 남해군 상주면 상주리 일원

○ 규 모 : 부지면적 96,026㎡ 중 5,619㎡, 연면적 1,753.08㎡

- 체육시설(948.36㎡) : 다목적체육관(693㎡), 체력단련장(154.56㎡), 샤워·탈의실(100.8㎡)

- 문화교육실(133.68㎡) : 마주침공간(51.24㎡), 방음공간(51.24㎡), 학습공간(31.2㎡)

- 공용 공간 등 기타 부대시설(440.14㎡) : 안내데스크·방송실·사무실(52.28㎡),

전기·기계실·창고(59.85㎡), 홀·계단·화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,900	0	1,363	3,637	1,900
국 비	1,700		502	1,198
시 도 비	200		126	74
시군구비	5,000		735	2,365	1,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021.  9월 : 실시설계용역 완료

○ 2021. 10월 : 군관리계획 변경, 실시계획인가, 건축허가

○ 2021. 12월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 5월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

청정어장 재생사업

담당자

해양수산과 최상준(☎860-3377)

□ 사업목적 및 필요성

○ 과밀 노후화된 어장 및 주변해역을 대상으로 오염퇴적물 제거 등 어장환경 개선을 추진하여 지속가능한 어장환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ～ 2025년(5년간)

○ 위 치 : 남해군 강진만 해역 일원

○ 규 모 : 청정어장재생(3,000ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,000	0	2,500	2,500	10,000
국 비	7,500	0	1,250	1,250	5,000
시 도 비	1,500	0	250	250	1,000
시군구비	6,000	0	1,000	1,000	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ '21. 09월 : 사업 대상지 확정(경남도)

○ '21. 09월 : 주민 설명회 개최

□ 향후계획

○ '23. 01~05월 : 2차 사업 실시설계 협의(경남도)

○ '23. 06~12월 : 2차 사업 추진

○ '24. 02월 : 3차 사업 공모신청 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

친환경 개체굴 생산시설 지원사업

담당자

해양수산과

이승은(☎860-3363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경·고부가가치 양식품종의 생산 증대를 위하여 기르는어업의 기반시설을 확충하고, 기술 개발·보급을 촉진하며, 수산종자 및 양식 시설을 친환경·첨단시스템으로 전환키 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘21. 1월 ~ ‘22. 12월

○ 위 치 : 경남 남해군 설천면 문의리 1045-3,5

○ 규 모 : 종자육성 배양장 부지면적 3,368㎡ , 건축면적 630㎡,

공동자동화 작업대 1대, 공동 자동화 작업선 2대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000			2,000
국 비	1,000			1,000
시 도 비	180			180
시군구비	420			420
지 방 채
민간자본	400			400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 21. 9월 : 남해군 투자심사 완료

○ 22. 3월 : 사업계획 변경 승인(경남도)

○ 22. 6월 : 해상공동 작업대 낙찰자 선정 및 착수

□ 향후계획

○ 22. 7월 : 해상공동 작업선 입찰 및 사업 착수

○ 22. 7월 : 기재부와 부지문제 협의

□ 사업변경 내역

○ 사업계획 변경승인

당 초	변 경
개체굴 종자육성 배양장 1식 해상 친환경 개체굴 공동작업대 3대	개체굴 종자육성 배양장 1식 해상 친환경 개체굴 공동작업대 1대 해상 친환경 개체굴 공동 자동화 작업선 2대

사업명

남해군 서면 장항항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 한동희(☎860-3374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지속가능한 사업을 위한 장항마을의 활성화

○ 생활밀착형 SOC환경개선을 통한 어업환경 제공 및 어민들의 삶의 질 보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023년

○ 위 치 : 남해군 서면 서상리 장항항 일원

○ 규 모 : A=30,000㎡

- 공통사업 : 선착장, 돌제, 부잔교 및 도교, 파도막이, CCTV

- 특화사업 : 다목적센터, 마을정비, 쉼터, 안전시설, 관광레저

- S/W사업 : 역량강화

- 사업지원 : 설계, 위탁수수료 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,377백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,377		1,475.4	2,950.8	2,950.8
국 비	5,163.9		1,032.7	2,065.6	2,065.6
시 도 비	664		132.8	265.6	265.6
시군구비	1,549.1		309.9	619.6	619.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 4. 30. : 어촌뉴딜300사업 선정

○ 2021. 5. 21. : 기본계획 및 지역역량 강화사업 용역착수

○ 2021. 8. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 12. 31. : 기본계획 고시

□ 향후계획

○ 2022. 9월 : 공사착수

○ 2023. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

남해군 미조면 초전항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 한동희(☎860-3374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌마을 영속성을 위한 안전한 어항 조성 및 젊은 귀어인 유입

○ 지속가능한 성장 토대로 삶의 질 향상과 일자리 창출로 살기좋은 마을 만들기

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023년

○ 위 치 : 남해군 서면 서상리 장항항 일원

○ 규 모 : A=30,000㎡

- 공통사업 : 방파제, 부잔교, 어구건조장, 파도막이, 안전시설

- 특화사업 : 판매시설, 다목적센터, 주자창조성, 종합안내판, 경관시설

- S/W사업 : 역량강화

- 사업지원 : 설계, 위탁수수료 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,756백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,756		1,951.2	3,902.4	3,902.4
국 비	6,829.2		1,365.8	2,731.7	2,731.7
시 도 비	878		175.6	351.2	351.2
시군구비	2,048.8		409.8	819.5	819.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 12. 30. : 어촌뉴딜300사업 선정

○ 2021. 5. 21. : 기본계획 및 지역역량 강화사업 용역착수

○ 2021. 8. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 12. 31. : 기본계획 고시

□ 향후계획

○ 2022. 9월 : 공사착수

○ 2023. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도시계획도로 개설

(소로2-16,19호선 / 매일유업~솔밭냉열)

담당자

도시건축과 이재성(☎860-3415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량을 분산하여 교통체증을 줄이고, 긴급상황에 따른 안전사고 대처 등 생활환경을 개선하기 위해 화재진압을 위한 소방도로 등과 같은 도시계획도로를 개설코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023

○ 위 치 : 남해읍 북변리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=290m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,800	-	-	800	2,000
시 도 비	100	-	-	100	-
시군구비	2,700	-	-	700	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ’22. 04. : 실시설계 용역 및 분할측량 완료

○ ’22. 05. : 보상계획 열람공고

□ 향후계획

○ ‘22. 07. : 감정평가 의뢰 및 실시

○ ‘22. 08. : 보상협의 추진

○ ‘22. 12. : 보상완료 및 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

두모마을 스마트 복합쉼터 조성

담당자

건설교통과 신동평(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 3대 기도처 중 하나인 금산 보리암 탐방객 편의 제공

○ 방문객 휴식공간 제공과 지역주민 특산물 판매를 통하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 남해군 상주면 양어리 93번지 일원

○ 규 모 : 복합쉼터 조성 A=13,300㎡

(주차장, 화장실, 전망대, 특산물 판매장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500		130		3,370
국 비	2,000	0	32	0	1,968
시 도 비
시군구비	1,500	0	98	0	1,402
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 2021. 3. 스마트 복합쉼터 공모전 선정

○ 2021. 4. MOU체결(진주국토관리사무소↔남해군)

○ 2021. 4. 공원계획 변경 반영 협의

○ 2021. 8. 국토연구원 건설팅 실시

□ 향후계획

○ 2022. 10. 공원계획 변경 고시(주차장 시설 결정)

○ 2022. 11. 공원사업시행허가

○ 2023.  1. 공사 발주 및 착공

○ 2023. 12. 공사완료 및 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

복곡∼내산 간 도로개설공사

담당자

건설교통과 신동평(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역의 접근성 개선으로 이동면과 삼동면의 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2026

○ 위 치 : 남해군 상주면 양어리 93번지 일원

○ 규 모 : 복합쉼터 조성 A=13,300㎡

(주차장, 화장실, 전망대, 특산물 판매장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	30,000	800	100	0	29,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계중)

○ 2019. 11. 기본 및 실시설계 착수

○ 2020.  2. 행정절차 진행 및 관련기관 협의

○ 2020.  7. 주민설명회 1차 이동면, 삼동면

○ 2020.  8. 주민설명회 2차 내산, 대지포 마을

○ 2022.  6. 행정잘차 진행 및 관련기관 협의 계속

□ 향후계획

○ 2022.  7. 공종별 세부설계 완료

○ 2022. 10. 행정잘차 진행 및 관련기관 협의

○ 2023.  2. 기본 및 실시설계 완료

○ 2024.  1. 공사 발주 및 착공

○ 2026. 12. 공사 완료 및 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)