미래전략사업단

목       차

Ⅲ. 20ㄷ11년 주요업무계획Ⅲ. 2011년 주요업무계획

Ⅰ. 2016년 주요업무계획

1. 남해 미래30년 전략사업	1

2. 동대만 간이역 조성사업	2

3. 둔촌마을 손봄이사업	3

4. 선진국형 전원주택지역 추진	4

5. 서대 신규마을 조성	5

6. 고현면 소재지 종합정비사업	6

7. 창조적 마을 만들기(권역단위 종합개발)	7

8. 창조적 마을 만들기(마을종합‧마을단위)	9

9. 상주면 농촌생활환경정비	10

10. 농촌테마공원 조성사업	11

11. 2017년도 일반농산어촌개발사업 신청	12

12. 보물섬 800리길 조성	13

13. 남해문화관광단지 힐링빌리지 조성	14

14. 남해 바래길 관리	15

1

남해 미래30년 전략사업

❍『행복한 군민 도약하는 남해』실현을 위해 새로운 장기비전과 추진전략이 필요함에 따라 ‘남해 미래30년 전략사업’을 추진

❍ 적극적인 공모사업 신청으로 국·도비 유치활동 집중

사업개요

❍ 자체재원으로 추진하기 힘든 시급한 현안사업 발굴

❍ 적극적인 국·도비 유치활동 추진

추진계획

❍ 공모사업 신청을 위한 사전준비 철저

- 사업의 필요성, 사업효과 등 공모사업에 선정될 수 있는

논리 개발을 통한 사업계획서 작성

❍ 사업 준비과정부터 주민 의견 적극 반영

- 사업 추진 가속화 및 차후 발생할 수 있는 민원 예방

소요예산 : 200백만원(군비 200)

❍ 남해 飛上30년 발전계획 수립 연구용역 : 200백만원

문제점 및 대책

❍ 대규모 매칭사업의 경우, 군비 부담 애로

⇒ 사업 필요성, 사업효과의 검토를 통해 추진 가능한 사업 선정

미래전략 사업단	미래전략팀

2

동대만 간이역 조성사업

❍ 보물섬 800리길의 시작을 알리는 사업으로 관광·체험·휴식이 가능한 융복합형 문화공간 장터인 ‘간이역’ 조성

- 지역수요 맞춤형지원사업(국토교통부)

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 창선면 상신리 2-1번지 일원

❍ 사업기간 :  2016년∼2018년(3년간)

❍ 사업내용 : 게스트하우스, 향토음식점, 특산물판매점,

휴게소, 안내소, 소공연장, 주차장, 레일바이크

❍ 사 업 비 : 2,155백만원(국비1,315, 군비840)

추진계획

❍ 실시설계용역 착수 :‘16. 1월

❍ 사업 착공 :‘16. 6월

소요예산 : 800백만원(지특 500, 군비 300)

❍ 실시설계 용역 : 104백만원

❍ 간이역 조성 : 696백만원

문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

미래전략 사업단	미래전략팀

3

둔촌마을 손봄이사업

❍ 농어촌 취약지역 생활환경 개선사업으로 주민들의 기본적인 생활수준(national minimum) 보장

❍ 안전․위생 등 긴요한 생활인프라 확충 및 주거환경 개선

- 농어촌 취약지역 생활여건 개선사업(농림축산식품부)

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 삼동면 금송리 둔촌마을 일원

❍ 사업기간 :  2015년∼2017년(3년간)

❍ 사업내용 :

- 주거환경 개선(슬레이트 철거, 빈집정비, 재래식화장실 철거)

- 기반시설 정비(하수처리장 및 재해방지시설 신설)

- 생활위생·안전분야(cctv 설치, 마을버스 정류소 개설 등)

❍ 사 업 비 : 2,104백만원(지특 1,561, 도비 146.4, 군비 341.6 자부담 55)

추진계획

❍ 사업 착공 :‘16. 1월

소요예산 : 1,263백만원(지특 950, 도비 106, 군비 207)

❍ 하수처리시설 : 450백만원

❍ 재해방지시설 : 500백만원

❍ 공동화장실 및 간이판매시설 : 77백만원

❍ 마을버스 정류장 : 20백만원

❍ 경관시설 및 주택정비 등 : 216백만원

문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

미래전략 사업단	미래전략팀

4

선진국형 전원주택지역 추진

❍ 특색있는 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의 농촌유입을

촉진함으로서 인구증대 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 이동면 화계리 일원 (27,230㎡)

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

❍ 사업내용 : 신규마을 조성 23가구

❍ 사 업 비 : 3,942백만원

추진계획

❍ 2016.  3월 : 마을정비구역 지정 도 승인

❍ 2016.  5월 : 시행계획 승인

❍ 2016.  7월 : 공사 착공

❍ 2017. 12월 : 기반시설공사 준공

❍ 2018. 12월 : 주택 신축 및 입주 완료

소요예산 : 200백만원(국비 140, 군비 60)

문제점 및 대책

❍ 돈사 내부 축분 처리문제로 건물철거가 이루어지지 못하고 있는 실정임

⇒ 2016년 2월까지 돈사 내부 축분처리 완료

미래전략 사업단	지역개발팀

5

서대 신규마을 조성

❍ 입주자 주도형의 신규마을을 조성하여 도시민의 농촌 유입을 촉진하고, 농촌지역 활성화를 도모

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 창선면 서대리 일원 (29,459㎡)

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

❍ 사업내용 : 신규마을 조성 23가구

❍ 사 업 비 : 3,165백만원

추진계획

❍ 2016.  3월 : 마을정비구역 지정 도 승인

❍ 2016.  5월 : 시행계획 승인

❍ 2016.  7월 : 공사 착공

❍ 2017. 12월 : 기반시설공사 준공

❍ 2018. 12월 : 주택 신축 및 입주 완료

소요예산 : 99백만원(국비 69, 군비 30)

❍ 군비 30백만원 마을정비조합 부담

문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

미래전략 사업단	지역개발팀

6

고현면 소재지 종합정비사업

❍ 고현면 소재지의 교육․문화․복지시설과 가로경관 등의 정주여건을 개선함으로써 거점기능 강화를 통한 지역생활권 중심역할 수행

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 고현면 소재지 일원(탑동․중앙)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

❍ 사업내용 : 복지회관 신축, 문화광장 조성, 생태주차장 조성, 가로경관 정비, 지역역량강화사업 등

❍ 사 업 비 : 70억원

추진계획

❍ 2016.  4월 : 기본계획 도 협의 승인

❍ 2016.  6월 : 시행계획 도 협의 승인

❍ 2016.  7월 : 공사 착공

소요예산 : 800백만원(국비 560, 도비 72, 군비 168)

문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

미래전략 사업단	지역개발팀

7

창조적 마을 만들기(권역단위 종합개발)

❍ 농어촌 지역사회를 활성화하기 위하여 인근 마을을 하나의 권역으로 묶어 체계적인 종합개발계획을 수립하여 개발

사업개요

(단위: 백만원)

권역명	대상마을	사업기간	총사업비	2016년 사업비	사업내용
계			24,670	4,991
도 산	중현,회룡 도산,현촌	2013 ~ 2016	4,300	2,435	다목적센터 조성, 시리봉 생태 탐방로 조성, 운곡사 주변 정비, 습지 생태원 등
북남치	대사,북남치동남치,관당	2013 ~ 2016	4,300	2,156	옛동 수변경관 정비, 다목적 활성화 센터 건립, 마을 안길 정비, 다목적 광장 조성
상 덕	구미,덕월 남구,북구	2011 ~ 2015	5,420	-	상덕천 주변 정비, 바래길 쉼터조성, 한반도 바래길 쉼터 조성, 작은 마을 박물관 조성 등
해바리	신흥,지족 사포	2012 ~ 2015	4,200	-	다목적센터 건립, 해안 생태공원 조성, 사포문화복지나눔터, 지족마을공동시설 건립 등
은 점	은점,대지포	2014 ~ 2017	2,250	200	어촌체험마을 리모델링, 일출광장 정비사업, 다목적 회관 건립 등
양 아	벽련,두모 소량,대량	2014 ~ 2017	4,200	200	다목적회관, 진입로 정비, 공원조성 등

추진계획

❍ 도산권역(한국농어촌공사 위탁 시행)

- 2016.  4월 : 시행계획 도 협의 승인

- 2016.  5월 : 1단계 사업 착공

❍ 북남치권역(한국농어촌공사 위탁 시행)

- 2016.  2월 : 시행계획(2단계) 도 협의 승인

- 2016.  3월 : 2단계 사업 착공

• 활성화센터 신축, 마을 숲 정비, 낚시터 설치 등

- 2016.  8월 : 2단계 사업 완료

❍ 상덕권역(군 시행)

- 2016.  4월 : 도 시행계획 변경 협의 승인

- 2016.  5월 : 체험 숙박시설 등 발주(집행잔액)

- 2016. 12월 : 사업 완료

❍ 해바리권역(한국농어촌공사 위탁 시행)

- 2016.  6월 : 사업 완료

❍ 은점권역(한국농어촌공사 위탁 시행)

- 2016.  4월 : 시행계획 도 협의 승인

- 2016.  6월 : 공사 착공

❍ 양아권역(한국농어촌공사 위탁 시행)

- 2016.  4월 : 공원계획변경 협의(환경부)

- 2016.  5월 : 기본계획 도 협의 승인

- 2016.  7월 : 시행계획 도 협의 승인

- 2016.  8월 : 공사 착공

소요예산 : 4,991백만원(국비 3,494, 도비 449, 군비 1,048)

문제점 및 대책

❍ 도산권역은 주민갈등 및 유지관리방안 미흡으로 사업추진 지연

⇒ 시행계획(안)에 반영된 세부시설 재검토 후 사업 추진

미래전략 사업단	지역개발팀

8

창조적 마을 만들기(마을종합ㆍ마을단위)

❍ 농산어촌지역의 어메니티 증진과 계획적인 개발로 주민 삶의 질 향상 및 지역별 특화발전 도모

사업개요

(단위: 백만원)

마을명	사업기간	총사업비	2016년 사업비	사업내용
계		1,707	607
송정	2015 ~ 2017	757	300	회관 보수, 홍보관 신축, 경관정비, 안내간판, 역량강화 등
작장	2016 ~ 2017	500	150	회관 리모델링, 안길 정비, 역량 강화 등
봉우	2016 ~ 2017	450	157	먹거리․갯벌 체험장, 쉼터 조성, 해안길 정비, 역량강화 등

추진계획

❍ 송정(마을종합)

- 2016.  3월 : 기본계획 도 협의 승인

- 2016.  7월 : 시행계획 도 협의 승인

- 2016.  8월 : 공사 착공

- 2017. 12월 : 공사 완료

❍ 작장(마을단위 - 공동문화․복지)

- 2016.  5월 : 기본․시행계획 도 협의 승인

- 2016.  6월 : 공사 착공

- 2017. 12월 : 공사 완료

❍ 봉우(마을단위 - 체험․소득)

- 2016.  5월 : 기본․시행계획 도 협의 승인

- 2016.  6월 : 공사 착공

- 2017. 12월 : 공사 완료

소요예산 : 607백만원(국비 425, 도비 55, 군비 127)

미래전략 사업단	지역개발팀

9

상주면 농촌생활환경정비

❍ 복지시설 부족으로 다양한 복지혜택을 누리지 못하고 있는 상주지역 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 종합복지회관 신축

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 상주면사무소 일원

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

❍ 사업내용 : 종합복지회관 신축

※규모 : 지상 3층, 건축면적 540㎡, 건축연면적 1,113㎡

❍ 사 업 비 : 30억원

추진계획

❍ 2016.  4월 : 실시설계 완료

❍ 2016. 12월 : 종합복지회관 준공 및 개관

소요예산 : 2,240백만원(국비 1,568, 도비 202, 군비 470)

문제점 및 대책

❍ 상주지구단위계획도로(소로2-8호, L=125.5 B=8) 개설공사와 연계하여 추진하고 있으나, 공사 편입부지 소유자가 보상가격이 낮다는 이유로 보상협의를 하지 않고 있어 사업추진이 지연되고 있음

⇒ 지속적인 소유자 방문 및 설득(도시계획팀)으로 조기 보상 협의 완료

미래전략 사업단	지역개발팀

10

농촌테마공원 조성사업

❍ 수려한 자연경관과 어우러진 특색있는 테마공원 조성으로 새로운 관광자원 확충

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 상주면 양아리 127번지 일원 (112,794㎡)

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2021년

❍ 사업내용 : 테마공원 조성

❍ 사 업 비 : 97억원

추진계획

❍ 2016.  3월 : 편입부지 보상완료

❍ 2016.  4월 : 2017년도 농촌자원복합산업화지원사업(신규) 신청

❍ 2016.  8월 : 사업 확정

소요예산 : 해당없음

문제점 및 대책

❍ 농촌테마공원은 지특회계 도자율 편성사업으로 도 사업 반영 필요

⇒ 도의원과 긴밀한 협조체계를 구축하여 도 농업정책과 방문 협의 등으로

도 사업 반영

미래전략 사업단	지역개발팀

11

2017년도 일반농산어촌개발사업 신청

❍ 농림축산식품부에서 공모사업으로 지원하는 2017년도 일반농산어촌개발사업에 우리 군 필요사업이 선정될 수 있도록 사전준비 철저

사업개요

신청사업명		사업비	신청지역
농촌중심지 활성화	일반지구	60억원 이하	이동면소재지 서면소재지
창조적 마을 만들기	3개 분야	5억원 이하	항촌, 가천 동갈화, 냉천

※ 2016년도 공모사업 선정 제외사업 재신청 : 이동면, 항촌, 동갈화, 냉천

추진계획

❍ 2016.  1월 : 2017년도 사업 신청 및 도 평가(서류 및 대면평가)

❍ 2016.  3월 : 농림축산식품부 대면평가

❍ 2016.  6월 : 2018년도 사업 신청 예비단계(농촌현장포럼) 착수

※ 2018년도 : 8개소 신청(통합지구 1, 일반지구 1, 창조적 마을 6)

❍ 2016.  9월 : 2017년도 선정사업 발표

소요예산 : 363백만원(국비 105, 도비 16.2, 군비 241.8)

문제점 및 대책

❍ 농식품부 배정 예산 내에서 전국 122개 시ㆍ군이 신청하여 경쟁이

치열할 것으로 예상되므로 평가지표 분석 및 사업별 발표자

(추진위원장) 사전 교육 등으로 경남도 및 중앙 심사 준비 철저

미래전략 사업단	지역개발팀

12

보물섬 800리길 조성

❍ 아름다운 해안경관을 활용한 체계적인 관광루트 개발

❍ 지역농산물 및 특산물 판매 시스템 구축으로 주민 소득증대 기여

사업개요

❍ 위    치 : 경남 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

❍ 사업내용 : A=100,000㎡

- 간이역조성 : 전망대, 산책로, 공연장, 주차장, 휴게소 등

❍ 사 업 비 : 165억원(국비 82.5, 도비 24.8, 군비 57.7)

추진계획

❍ 2016. 3월 ~ 5월 : 부지매입

❍ 2016. 8월 : 실시설계

❍ 보물섬 800리길 단절구간 연결(개설)공사

- 읍 선소리 일원 : L=0.9km, B=8m, 18억원(사업비 확보 6억원)

- 설천 문항 일원 : L=1.0km, B=8m, 19억원(사업비 미확보)

- 이동 갯마을 해안 : L=0.5km, B=8m, 12억원(사업비 미확보)      ❍ 2017. 3월 : 사업착수

소요예산 : 1,005백만원(군비)

❍ 부지매입비 : 1,000백만원

❍ 보물섬 800리길 상표등록, 추진위원회 수당 : 5백만원

문제점 및 대책

❍ 사업규모가 복합사업 성격으로 중앙부처 예산확보 애로

⇒ 동대만 간이역 조성사업 공모사업 선정과 같이 지속적인

공모사업 신청으로 예산 확보

미래전략 사업단	특화사업팀

13

남해문화관광단지 힐링빌리지 조성

❍ 정착․체험․휴양 등 복합관광자원을 접목한 새로운

관광 트랜드 제시

❍ 다양한 관광 수요 및 패러다임 변화에 부응하는 지역 자립형

친환경 힐링 테마빌리지 조성

사업개요

❍ 위 치 : 경남 남해군 창선면 진동리 654번지 일원

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

❍ 사업내용 : A=171,977㎡

- 공공 : 힐링센터, 공원, 전망대, 미술관, 도로, 상하수도 등

- 민자 : 친환경주택 30동, 휴양리조트 등

❍ 사 업 비 : 233억원(국비 60, 도비 18, 군비 155)

추진계획

❍ 2016.  3월 : 부지보상 협의 완료(미 협의 시 수용재결),

입주확약자(26명)에 대한 가계약 체결 /일본 방문

❍ 2016.  4월 : 지구단위계획 결정고시

❍ 2016.  6월 : 인허가 협의 및 실시계획 인가 고시

❍ 2016.  7월 : 사업착수

소요예산 : 5,366백만원(국비 1,300, 도비 390, 군비 3,676)

❍ 부지매입비: 2,766백만원

❍ 기반조성(주차장, 공원, 도로 등) 시설비 : 2,600백만원

문제점 및 대책

❍ 부지매입 지연 (‘16. 1. 8현재 81% 매입완료)

⇒ 협의불응 필지에 대해서는 수용재결 신청

미래전략 사업단	특화사업팀

14

남해 바래길 관리

❍ 남해 바래길을 지역의 다양한 관광자원과 연계한 녹색관광     인프라 확충으로 다시 찾고 싶은 명품길로 조성

❍ 지속적인 탐방로 유지관리로 탐방객들에게 편의도모

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2016년

❍ 사업내용 : 10코스 135km

- 바래길 탐방센터 운영, 바래길 유지관리 및 홍보

❍ 사 업 비 : 67백만원

추진계획

❍ 2016. 1월~12월 : 바래길 탐방센터 운영 및 바래길 유지관리

❍ 2016. 5월~10월 : 바래길 풀베기

❍ 2016. 10월 : 바래길 가을소풍

❍ 2016. 11월 : 바래지기 양성교육

소요예산 : 67백만원(군비)

❍ 바래길 탐방센터 및 화장실 관리 인건비 등 : 28백만원

❍ 홍보물 및 소모품 구입 등 : 10백만원

❍ 바래길 가을소풍 및 워크숍 등 : 19백만원

❍ 바래길 풀베기 및 시설물 보수 : 10백만원

문제점 및 대책

❍ 바래길 유지관리에 필요한 예산확보 애로

⇒ 추경 시 풀베기 예산 등 추가 확보(1억 원)

미래전략 사업단	특화사업팀