상하수도사업소

목       차

Ⅲ. 2011년 주요업무계획Ⅲ. 2011년 주〔〕요업무계획

Ⅰ. 2016년 주요업무계획

1. 공공하수처리시설 관리운영	1

2. 광역상수도 공급 확대	2

3. 도서지역 식수원 개발사업	3

4. 마을상수도 시설개량사업	4

5. 남해군 수도정비기본계획[변경] 수립	5

6. 상수도 주부검침제 운영	6

7. 남해읍 하수관거정비사업[2단계]	7

8. 마을하수처리시설 설치사업	8

9. 신재생에너지 융▪복합지원사업	9

10. 개인하수처리시설 관리	10

1

공공하수처리시설 관리운영

❍ 남해읍 공공하수처리시설 관리 직영을 통한 예산절감

❍ 면단위 및 소규모시설 민간위탁 관리로 체계적인 하수처리

사업개요

❍ 대상지 : 환경기초시설 58개소

- 남해군 관내 공공하수처리시설, 분뇨․침출수․하수슬러지 등

❍ 처리량 : 16,604톤/ 일

추진계획

❍ 관리직영시설(2015.8.1부터 계속)

- 남해읍 본처리장, 분뇨처리장, 쓰레기침출수처리장

❍ 관리대행시설

- 이동,상주,미조처리장 및 면단위 소규모시설 53개소

• 대행성과 평가를 통한 계약갱신 추진(2016.7.31까지)

소요예산 : 2,600백만원(2015년예산 3,300백만원)

❍ 관리직영시설 : 900백만원

❍ 관리대행시설 : 1,700백만원

- 신규시설(원천) 및 타부서 통합관리(독일마을 외 5개소)

문제점 및 대책

❍ 2015.8.1부터 관리직영으로 기술직(환경)공무원 배치 요망

상하수도사업소	관리운영팀

2

광역상수도 공급확대(설천면 미급수지역]

❍ 상수도 미급수지역인 설천면 지역에 광역상수도를 보급하여

주민들에게 안전하고 깨끗한 물을 공급하여 식수난 해소

사업개요

❍ 위    치 : 설천면 일원

❍ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2018년 12월

❍ 사업내용

- 수자원공사(K-water)와 연계한 광역상수도 통합시스템 구축

- 광역상수도 3천 톤/일 추가확보로 설천면 지역 공급

❍ 총사업비 : 2,622백만원(‘16년 800백만원)

추진계획

❍ 2016.  1 : 수자원공사와 협약체결

❍ 2016.  2 : 광역상수도 통합시스템 구축 시행

❍ 2018.  6 : 시스템 구축완료 및 통수시험

❍ 2018. 12 : 가정급수공사 완료 및 급수

소요예산 : 800백만원(군비)

문제점 및 대책

❍ 개인부담인 가정급수공사비로 인한 민원 다수 발생

⇒ 정확한 현장조사를 실시하고 주민 설명회를 통해 주민이해

상하수도사업소	상수도팀

3

도서지역 식수원 개발사업

❍ 상수도 미급수지역에 안정적이고 위생적인 광역상수도 공급으로 주민의 삶의 질 향상

- 국도비사업 : 환경부

사업개요

❍ 위    치 : 남해군 일원

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2017년

❍ 사업내용 : 상수도 공급시설(관로, 배수지, 가압장 등) 설치

❍ 총사업비 : 30,818백만원(‘16년 5,234백만원)

추진계획

구분	사업량	사업비(백만원)				비고
		계	기투자	2016	이후
계		30,818	17,604	5,234	7,980
남해도	배수지2, 가압장5, 관로147km	25,763	15,640	2,143	7,980
남해도3	동천배수지 1천톤, 관로3km	2,722	1,136	1,586	-
창선도2	고순~신흥 관로8km	2,333	828	1,505	-

소요예산 : 5,234백만원(국: 3,663 도: 471 군: 1,100)

문제점 및 대책

❍ 국비예산지원의 지연으로 공사 장기화

⇒ 국비예산확보 총력

상하수도사업소	상수도팀

4

마을상수도 시설개량사업

❍ 노후된 마을상수도 시설(물탱크, 관로, 관정 등)을 개선하여 마을 주민의 안정적인 식수 공급

마을상수도 현황

❍ 마을상수도 : 127개 마을(지하수 100마을, 계곡수 27마을)

❍ 공급현황 : 19,642명, 6,099톤/일(2014년 기준)

추진계획

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		계	2016	2017	2018
마을상수도시설개선	계	3,350	270	1,540	1,540
	물탱크 교체 30개소	1,500	100	700	700
	염소 투입기 38개소	190	40	70	80
	무선수위조절기 32개소	160	50	50	60
	노후관로 교체 12개소	600	70	280	250
	지하수 개발 12개소	600	-	300	300
	기 타(물탱크 청소 등)	300	10	140	150

추진계획

❍ 2015. 8월 : 마을 상수도 전수조사

❍ 2016. 3월 : 실시설계 완료 및 착공

소요예산 : 270백만원(군비)

문제점 및 대책

❍ 사업시행 시 우선순위 선정애로

⇒ 노후 콘크리트 물탱크 우선시행

❍ 맑은 물 공급과 건강증진을 위하여 연도별 예산확보 추진

상하수도사업소	상수도팀

5

남해군 수도정비기본계획[변경] 수립

❍ 상수도 수요관리계획 및 상수도시설 안정화계획 수립으로 맑은

물의 안정적인 공급

사업개요

❍ 사업기간 : 2015년 9월 ~ 2016년 12월

❍ 사업내용

- IGCC 등 각종개발계획에 따른 중장기 물관리 종합계획 수립

- 수도관의 현황조사(노후관 등)로 유수율 제고 계획 수립

❍ 총사업비 : 714백만원(‘16년예산 200백만원)

추진계획

❍ 2015.09 : 수도정비기본계획(변경) 용역 PQ

❍ 2015.10 : 입찰공고 및 사업자 선정

❍ 2016.11 : 수도정비기본계획(변경) 용역 완료

❍ 2016.12 : 수도정비기본계획(변경) 고시

※ 근 거 : 수도법 제4조 및 동법 시행령 제6조

소요예산 : 200백만원(군비)

문제점 및 대책

❍ 환경부 승인 등 행정절차 기간 장기 소요

상하수도사업소	상수도팀

6

상수도 주부검침제 운영

❍ 급수구역의 확대로 검침 가구 수가 증가되고 있으나 인력부족

등으로 어려움을 겪고 있어 주부검침제를 운영하여 검침 및

각종 민원을 원활히 처리

사업개요

❍ 운영기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월

❍ 운영지역 : 읍, 이동, 상주, 미조, 남면, 창선

❍ 운영인원 : 주부검침요원 8명

❍ 운영내용 : 매월 수도계량기 검침 및 전산입력 등

추진계획

❍ 읍면별 수용가 및 검침인원                  (단위 : 천/명)

읍 면	수용가	검침인원	읍 면	수용가	검침인원
남해읍	2,708	2	남 면	1,706	1
이동면	859	1	서 면	387	1
상주면	537	1	고현면	849	2
삼동면	559	1	창선면	1,780	1
미조면	986	1	합 계	10,371	11

❍ 운영지역 정수장관리자와 주부검침요원 검침 병행

소요예산 : 63백만원(군비)

❍ 수전수(7,500전) X 700원 X 12월 = 63,000,000원

문제점 및 대책

❍ 마을상수도에서 광역․지방상수도로 전환되는 수용가의 증가로

주부검침제 확대운영 요구

상하수도사업소	상수도팀

7

남해읍 하수관거 정비사업(2단계)

❍ 남해읍하수처리장 인근마을 발생오수 통합처리로 공공수역의 수질개선과 지역주민의 쾌적한 생활환경 조성에 기여

- 국도비사업 : 환경부

사업개요

❍ 사 업 명 : 남해읍 하수관거 정비사업(2단계)

❍ 위    치 : 남해읍 시가지 외 15개 마을

❍ 사 업 량 : 오수관로 L=113.9km(2,300가구)

❍ 사업기간 : 2008. 6. 3 ~ 2016. 8. 31

❍ 사 업 비 : 190억 원                                 (금액 : 백만원)

구 분	합 계	2014까지	2015년도	비 고
합계	19,027	13,321	5,706	총사업비 교부완료 사업비 잔액 : 18억 (섬호,금석) 추진
국비	13,319	12,925	3,994
군비	5,708	3,996	1,712

추진계획

❍ 2015. 09. 04 : 섬호, 금석지구 사업추가 협의 완료

❍ 2015. 10. 10 : 섬호, 금석지구 추가 설계변경 시행 및 경남도계약심사

❍ 2016. 02. 01 : 섬호, 금석지구 사업착공

❍ 2016. 08. 31 : 남해읍 하수관거 정비사업 2단계 사업완료

소요예산 : - 백만원(국비 -, 군비 -)

※ 2015년까지 총사업비 교부 완료, 계속사업비 추진

문제점 및 대책

❍ 하수도정비기본계획 변경에 따른 섬호, 금석 지구의 사업구역편입으로 사업량 증가

⇒ 설계변경을 통한 섬호, 금석 지구 사업추진

상하수도사업소	하수도팀

8

마을하수처리시설 설치사업

❍ 마을단위 생활오폐수를 원활히 처리하여 공공수역의 수질개선과 지역주민의 쾌적한 생활환경 조성에 기여

- 국도비사업 : 환경부

사업개요

구 분	사 업 량	사 업 비(백만원)				비 고
		계	2014까지	2015년	2017이후
합 계		16,476	3,992	6,558	5,926	국비 70% 도비 15% 군비 15%
당항	하수처리장 Q=200톤/일 오수관로 12km	9,036	1,991	3,471	3,574
원천	하수처리장 Q=150톤/일 오수관로 2.5km	3,349	1,286	2,063	-
광천,사포	하수처리장 Q=85톤/일 오수관로 4.2km	4,091	715	1,024	2,352

추진계획

❍ 2015. 12. 31 : 공정률 (당항 62%, 원천 90%, 광천 80%)

❍ 2016. 06. 16 : 원천 소규모 하수처리시설 완료

❍ 2016. 12. 10 : 광천마을 하수처리시설 설치 완료

❍ 2017. 06. 16 : 당항 소규모 하수처리시설 완료

소요예산 : 당항(2,374백만원), 원천(1,444백만원)

※ 2016년도 국·도비 예산을 2015년 추경예산으로 조기 확보

문제점 및 대책

❍ 당항, 광천소규모 하수처리시설 설치공사(2단계)사업비 추가확보(59억)

상하수도사업소	하수도팀

9

신재생에너지 융·복합지원사업

❍ 남해읍 악취제거 및 실개천조성, 생태하천복원사업을 위한 하수처리수 재이용과 관련 압송펌핑 에너지원 확보로 예산절감

❍ 남해군 환경기초시설 주변마을 악취관련 수혜부여(태양광 등

설치로 전기료 절감)

- 공모사업 : 에너지관리공단

사업개요

❍ 위    치 : 남해읍 환경기초시설 내, 북변1, 곡내, 중촌, 선소,                 섬호, 토촌, 소입현, 죽산 마을

❍ 사업기간 : 2015 ∼ 2016년(1년간)

❍ 사 업 량 : 87개소(태양광 476Kw + 태양열 78㎡)

❍ 사 업 비 : 1,551백만원(국비 775, 군비 617, 민간 159)

❍ 투자계획                                           (단위:백만원)

구 분	합계	2015년까지	2016년	비 고
계	1,551	1,551
국 비	775	775
군 비	617	617
민간부담금	159	159

추진계획

❍ 2015.03.17 : 신재생에너지 융·복합지원사업 예정지 현지 확인

❍ 2015.05.07 : 신재생에너지 융·복합지원공모사업 선정

❍ 2015.05.21 : 융·복합지원사업 협약체결

❍ 2015.10.20 : 실시설계용역 시행

❍ 2015.12.20 : 사업발주 및 착공

❍ 2016.12.19 : 사업완료

소요예산 : 1,551백만원(국비 775, 군비 617, 민간 159)

문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

상하수도사업소	하수도팀

10

개인하수처리시설 관리

❍ 펜션 등 오수다량 발생사업장의 오수처리시설 점검 및 정화조 내부청소 홍보 등을 통해 보물섬 남해 청정바다 보전과 생활환경 개선 도모

현   황

구 분	개인하수처리시설		개인하수처리시설 등 관련 영업자
	정화조	오수처리시설	설계·시공업체	관리업체	분뇨수집·운반업
개소수	7,031	1,770	1	1	3

추진계획

❍ 정화조 내부청소 안내엽서 발송 : 매월1회

❍ 정화조 등 주기적인 내부청소 실시 홍보

- 전읍·면 마을이장회의를 통하여 홍보실시

❍ 개인하수처리시설(오수처리시설) 지도·점검 실시

- 펜션 등 숙박시설에 대한 일제점검 및 피서철 대비 캠핑장 특별점검 실시

- 영산강유역환경청 및 경남도청 합동 점검 실시

- 정상가동 여부 점검 및 방류수수질검사 실시 등

문제점 및 대책

❍ 건축물의 소유자 및 관리자가 개인하수처리시설(오수처리시설)의 가동원리에 대한 인식 부족

⇒ 관리·운영 안내스티커 부착 등 홍보

❍ 방류수질 기준 초과 시 행정처분(개선명령) 및 과태료 부과

상하수도사업소	하수도팀