11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 남해군에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
고현면 하수처리시설	12,518	8,755	3,763	0	2014	2006년 (도심사)	90%
노도문학의섬 조성	15,000	1,278	838	12,884	2016	2009 (도심사)	20%
도서지역식수원 개발사업(남해도)	25,762	9,607	1,092	15,063	2015년	2009년 (도심사)	48%
도서지역식수원 개발사업(창선도)	6,874	3,952	2,922	-	2013년	2009년 (도심사)	100%
서상-남산간 도로 확․포장 공사	32,400	7,454	6,000	18,946	2016	2010년 (도심사)	75%
광역친환경농업 단지조성	10,000	2,216	3,605	4,179	2013	2010년 (도심사)	93%
남해읍 하수관거정비공사	19,000	7,800	1,700	9,500	2015	2010년 (도심사)	75%
남해바래길 조성	4,800	793	1,296	2,711	2015	2010 (자체심사)	70
봉황산 나래숲 조성사업	7,505	1,505	2,000	4,000	2015	2011 (도심사)	40%
농협 미곡처리장 설치	3,121	1,353	1,238	530	2013	2011 (자체심사)	85%
생태관광단지 조성	2,000	200	1,800	-	2013	2011 (자체심사)	100%
다이어트 보물섬	23,600	-	-	23,600	2017	2012년 (도심사)	5%
힐링빌리지 조성	23,300	-	-	23,300	2017	2013년 (도심사)	5%
당항마을 하수처리시설	9,500	200	700	8,600	2016	2013년 (도심사)	2%
남해스포츠파크 전지훈련시설 확충	10,000	-	400	9,600	2016	2013년 (도심사)	5%
원천마을 하수처리시설	3,600	100	700	2,800	2016	2013년 (자체심사)	2%
석평소하천정비공사	4,800		602	4,198	2015	2013년 (자체심사	50%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

고현면 하수처리시설

담당자

환경수도과 정동관(☎860-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○남해군 고현면 일원에서 발생하는 각종 하수가 미처리상태로 남해로          유입되어 해역의 수질오염을 가중시키고 있어 하수종말처리시설을 설치하      여 공공해역의 수질개선 및 지역주민들의 생활환경개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2014

○ 위 치 : 남해군 고현면 대사리 668

○ 규 모 : 하수처리장 400톤/일, 하수관거 L=20.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,518백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,518	8,755	3,763	-	-
국 비	8,763	6,108	2,635	-	-
시 도 비	1,877.5	1,323.5	554	-	-
시군구비	1,877.5	1,323.5	554	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2008년 2월 : 기본 및 실시설계

○ 2009년 9월 : 공사착공 및 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 2014년 5월 : 준공

사업명

노도 문학의 섬 조성

담당자

문화관광과 김철현(☎860-8634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서포 김만중의 숨결이 깃든 아름다운 노도 섬과 유배문학을 결합하여 문학적 가치를 활용한 관광자원화로 관광객 유치 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 남해군 상주면 양아리 노도 일원

○ 사업기간 : 2011 ~ 2016년

○ 규    모 : 문학의 섬 조성 A=75,733㎡

○ 총사업비 : 15,000백만원(국비7,500, 도비2,250, 군비5,250)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	15,300	1,278	838	2,048	10,836
국 비	7,500	639	486	1,024	5,351
시 도 비	2,250	192	105	307	1,646
시군구비	5,250	447	247	717	3,839
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2009. 01월 : 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 2011. 05월 : 문화재지표조사 완료

○ 2012. 07월 : 실시설계 용역 발주(도화엔지니어링)

○ 2012. 08월 : 국립공원계획변경 승인(환경부)

○ 2013. 12월 : 실시설계 준공

□ 향후계획

○ 2014. 06월 : 사업착공

○ 2016. 12 : 사업완료

사업명

도서지역식수원개발사업(남해도)

담당자

환경수도과 윤한진 (☎ 860-3324)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급수난이 심각한 도서지역에 안정적인 상수도 공급

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011.5 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 남해도 일원

○ 규 모 : 관로매설 L=147.6km, 배수지 2개소, 가압장 5개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,762백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	25,762	9,607	1,092	2,857	12,206
국 비	18,037	6,725	765	2,000	8,547
시 도 비	2,316	865	98	257	1,096
시군구비	5,409	2,017	229	600	2,563
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○2011. 5월 : 착공

○2012. 9월 : 1차분 준공

○2013. 3월 : 2차분 준공

○2013. 3월 : 3차분 발주

□ 향후계획

○2014. 3월 : 4차분 발주

○2015년 12월 총괄분 준공 예정

사업명

도서지역식수원개발사업(창선도)

담당자

환경수도과 윤한진 (☎ 860-3324)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급수난이 심각한 창선도 일원에 안정적인 상수도 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011.5 ~ 2013. 12

○ 위 치 : 창선도 일원

○ 규 모 : 관로매설 L=37.4km, 배수지 1개소, 가압장 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,874백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,874	3,952	2,922	-	-
국 비	4,812	2,766	2,046	-	-
시 도 비	618	356	262	-	-
시군구비	1,444	830	614	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011. 5월 : 착공

○ 2012. 7월 : 1차분 준공

○ 2013. 3월 : 2차분 준공

○ 2013. 3월 : 3차분 발주

○ 2013. 12월 : 총괄분 준공

□ 향후계획

○ 시설물 유지 관리

사업명

서상-남산간 도로확포장 공사

담당자

건설교통과 최민규(☎860-3313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해스포츠파크 주 진입도로인 서상-남해읍간 도로 확포장으로 매년 늘어

가고 있는 전국단위 체육대회 개최에 따른 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010~2016(6년간)

○ 위 치 : 경상남도 남해군 서면 서상리~남해읍 평리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 공사 L=3.26km, B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	32,400	7,454	6,000	5,000	13,946
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	10,000	3,000	3,000	1,000	3,000
시군구비	22,400	4,454	3,000	4,000	10,946
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2010.  4월 ~ 2011.  4월 : 기본 및 실시설계

○ 2011.  9월 : 사업발주(조달청 입찰)

- 시공업체 : 현대산업개발(주), 동흥종합건설(주) 공동 도급

- 낙찰금액 : 16,608백만원, 낙찰률 : 79.99%

○ 2013.  5월 : 1차분 준공

□ 향후계획

○ 2014.  1월 : 2차분 준공

○ 2014.  1월 ~ 6월 : 3차분 공사착공 및 용지보상 협의

○ 2016. 10월 : 공사 완료

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업규모	L=3.0㎞, B=20.0m	L=3.26km,B=20.0m
총사업비	280억원	324억원
사업기간	2010-2014	2010-2016(6년간)
수요예측

사업명

광역친환경농업단지조성사업

담당자

환경농업과 민성식(☎860-3952)

□ 필요성 및 기대효과

○ 경종과 축산을 연계한 순환형 친환경 농업 육성

○ 친환경농업 비중을 확대하여 군 전역 환경농업도시 건설

□ 사업개요

○ 기간 : 2010 ~ 2014(5개읍면)

○ 사업규모 : 1개단지/1,350ha/2,300호

○ 주요사업내용 : 농축산순환자원화센터, 미생물배양시설, 우렁이양식장,

광역살포기, 친환경농자재창고, 친환경농산물유통시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원(광특 4,000, 도비 1,280, 군비 3,720, 자부담 1,000)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000	2,216	3,605	4,179	-
국 비	4,000	886	1,442	1,672	-
시 도 비	1,280	356	462	462	-
시군구비	3,720	752	1,341	1,627	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,000	222	360	418	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  93%)

○ 친환경농산물 유통시설 준공 : ‘12. 10월

○ 광역살포기 이용 벼 병해충 공동방제 : 268ha/‘11~’13년

- ‘11년 70ha, '12년 88ha, ’13년 110ha

○ 벼 육묘, 우렁이 등 친환경농자재 확대 생산 공급

- 벼 육묘 : '12년 11천상자, ‘13년 15천상자, ’14년 15천상자

- 우렁이 공급 : '12년 20톤, ‘13년 22톤, ’14년 32톤

□ 향후계획

○ 농축산순환자원화센터 준공 : ‘14. 4. 1

- 퇴비비료 및 미생물 성분검정 적합 판정(‘14. 5. 22한)

○ 광역살포기 이용 공동방제 : ‘14. 7~8월

○ 퇴비비료 시험생산 : ‘14. 9~12월/가축분퇴비 30만포, 액비 2,000톤

○ 친환경교육․체험관 착공~준공 : ‘14. 7~9월

○ 시설․장비 활용도 제고를 통한 군 전역 친환경농업 실천 : ‘14. 7월이후

사업명

남해읍 하수관거정비사업(제2단계)

담당자

환경수도과 정동관(☎860-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해읍 시가지 외 11개 지구에서 발생하는 오수가 미처리 상태로 방류되어      수질오염을 가속시키고 있으므로 지역실정에 적합한 하수관거 시설을 설치하여      공공수역 수질개선과 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2015

○ 위 치 : 남해군 남해읍 일원

○ 규 모 : 하수관거 L=86km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	19,000	7,800	1,700	3,804	5696
국 비	13,300	5,460	1,190	2,663	3,987
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,700	2,340	510	1,141	1,709
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2010. 3월 : 남해읍 하수관거 기본설계

○ 2011. 1월 : 공사착공 및 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 2015. 3월 : 준공 예정

사업명

남해바래길 조성

담당자

문화관광과 권우종(860-8644)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해군에 산재된 다양한 자연자원과 역사․문화자원을 탐방로와 연계하여 녹색관광 인프라 확충 및 관광산업 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2014년

○ 위 치 : 남해군 일원

○ 규 모 : 탐방로 조성 240㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,800	793	1,296	2,711	-
국 비	2,400	396	648	1,356	-
시 도 비	720	119	194	407	-
시군구비	1,680	278	454	948	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○남해바래길 기본계획 수립 : 2011. 4월

○1차 정비사업 추진 : 2011년 3월 ~ 2011년 12월

○2차 정비사업 추진 : 2012년 3월 ~ 2013년  4월

○탐방지원센터 건립 추진 : 2013. 2월 ~ 2013년 8월

□ 향후계획

○ 3차 정비사업 추진 : 2014년 7월

○ 시설물 유지관리 및 점검 실시

사업명

봉황산 나래숲 공원조성

담당자

농정산림과 하상균(☎860-3992)

□ 필요성 및 기대효과

○ 봉황산 나래숲 조성을 통하여 지역 주민의 휴식처 및 문화공간의 제공과       우리군의 특성에 맞는 테마 생활권형 숲 공원을 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2011년 ~ 2015년

○ 위치 : 남해군 남해읍 아산리 산132-1번지 일원

○ 시공사 : 덕양건설(주) 대표 이상엽

○ 사업규모 : 공원 303,920㎥

⇒ 산책로, 편익시설, 어린이 놀이터, 운동시설, 전망대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,505백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후소요액
		기투자	'13년도	'14년도	‘15년도 이후
계	7,505	1,505	2,000	2,500	1,500
국비	1,500		500	500	500
도비	550	100	150	150	150
시군구비	5,455	1,405	1,350	1,850	850
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ‘11. 03 : 사전재해영향성, 사전환경성검토 협의

○ ‘12. 01 : 남해군 관리계획 결정(변경) 및 지형도 고시

○ ‘12. 02 : 봉황산 나래숲 조성 실시설계 용역

○ ‘13. 07 : 사업발주 및 계약(총괄 및 1차분 산책로 조성)

□ 향후계획

○ ‘14. 06 : 2차분 공사 계약(놀이체험장, 향기원 등)

※ ‘12년~14년 : 부지매입(54필지 8ha/34억원)

○ 1차분 공사 : 산책로 조성 및 전망대 설치(3층)

○ 2차분 공사 : 놀이체험장, 향기원, 꽃향기 마루 조성(1.6ha)

○ 부지 미 매입자(9명)와 지속적인 부지 매입 협의(1.5ha)

사업명

농협 미곡처리장 설치

담당자

농정산림과 곽상래(☎860-3913)

□ 사업목적 및 기대효과

○ 도정시설 확충으로 보물섬 쌀 품질향상 및 판매 촉진

○ 벼 건조․저장, 가공판매를 일괄 처리를 통한 농가 편익증진 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2011년 ~2015년

○ 지원근거 : 농협미곡종합처리장(RPC)설치 『합의서』

○ 내용 : 민간시설 인수비용, 도정시설 개선경비, 운영 영업실적 손실보상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,121백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후소요액
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
계	3,121	1,353	1,238	530	-
국비	159			159
도비	16			16
시군구비	2,787	1,353	1,238	196
지방채
민간자본	159			159
기타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ '11년도 민간시설(남덕농산, 유진산업) 인수

○ '11년~13년 도정시설 개선경비 및 영업손실 보상

○ 노후시설 개보수 1식

○ '13년도 최첨단 도정시설 신축 : 1,238백만원

□ 향후계획

○ 고품질 쌀 유통활성화사업

- 공사기간 : 2014. 6월~9월(공사입찰 공고 중)

- 시설내용 : 건조시설 20톤/1식, 사일로 500톤 2기

- 사 업 비 : 530백만원(국비159, 도비16, 군비196, 자부담159)

○ 정부양곡도정공장 노후기계 교체

사업명

생태관광단지조성

담당자

문화관광과 권우종(860-8644)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불로초를 찾아 남해에 왔던 진시황의 신하 서불(서불과차)의 전설을 약초관광

산업에 접목하여 관광자원의 다양화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2013년

○ 위 치 : 남해군 이동면 신전리․화계리 일원

○ 규 모 : 홍보체험관 1동(3층), 테마공원 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,000	200	1,800	-	-
국 비	1,000	100	900	-	-
시 도 비	300	30	270	-	-
시군구비	700	70	630	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○2012. 5월 : 실시계획 인가

○2012. 6월 : 생태관광단지 착공

○2013. 12월 : 생태관광단지 조성 완료

○2013. 12월 : 생태관광단지(남해약초홍보관) 운영자 선정

□ 향후계획

○2014. 8월~9월 : 생태관광단지조성(남해약초홍보관) 개소 및 운영

사업명

남해 다이어트 보물섬 조성

담당자

문화관광과 박문두(☎860-8614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시의 바쁜 일상을 벗어나 생태계가 잘 보전된 섬으로 들어가 육체적 건강과 정신적 충만을 이룰 수 있는 특화된 생태 섬 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 경남 남해군 미조면 미조리 조도, 호도 일원

○ 규 모 : A=240,000㎡

- 다이어트센터, 명상원, 접안시설, 산책로, 전망대, 반딧불이 생태공원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	23,600	-	-	1,000	22.600
국 비	10,000	-	-	500	9.500
시 도 비	3,000	-	-	150	2,850
시군구비	10,600	-	-	350	10,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2011. 12월 : 기본계획 및 타당성조사 용역

○ 2012. 3월 : 지방재정 투융자심사(경상남도)

□ 향후계획

○ 2014. 6월 : 환경영향평가협의회 개최

○ 2014. 9월 : 실시설계 용역 착수

○ 2015. 7월 : 공사착수

○ 2017. 12월 : 공사 준공 및 시설 운영

사업명

남해 힐링빌리지 조성

담당자

문화관광과 박문두(☎860-8614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현대인의 화두로 떠오른 healing과 독특한 역사문화 자원을 관광자원화 하여 다양한 관광수요에 대응할 수 있는 새로운 관광 패러다임 변화에 부응하는 친환경 힐링 테마빌리지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 경남 남해군 창선면 진동리 654번지 일원

○ 규 모 : A=172,130㎡

- 공공 : 힐링센터, 다목적 커뮤니티센터, 전시시설, 도로, 상·하수도, 주차장, 공원, 산책로, 전망대 등

- 민자 : 친환경 주택 32동, 휴양호텔 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	23,300	-	-	5,700	17,600
국 비	6,000	-	-	600	5,400
시 도 비	1,800	-	-	180	1,620
시군구비	15,500	-	-	4,920	10,580
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2012. 6월 : 사업 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 2013. 8월 : 복합형 지구단위계획 수립 용역 발주

□ 향후계획

○ 2014. 1월 ~ 4월 : 주민설명회 개최, 감정평가, 토지보상 협의

○ 2014. 3월 : 감정평가 실시

○ 2014. 4월 : 토지보상 협의 공문 발송

○ 2014. 7월 ~ 2017. 12월 : 편입부지 보상, 실시설계, 사업 착수 및 준공

사업명

원천마을 하수처리시설

담당자

환경수도과 정동관(☎860-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○원천마을 일원에서 발생하는 오수가 미처리상태로 해안으로 유입되어

수질오염을 가중시키고 있어 방류해역의 수질오염을 저감시키고, 쾌적한       생활환경을 조성하기 위해 하수처리시설 및 하수관거 정비공사 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 남해군 이동면 원천마을 일원

○ 규 모 : 하수처리장 150톤/일, 하수관거 L=2.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,600	100	700	999	1,801
국 비	2,500	-	490	700	1,310
시 도 비	550	-	105	149.5	295.5
시군구비	550	100	105	149.5	195.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2012년 3월 ~ 2012년 12월 : 기본 및 실시설계용역 발주 및 준공

○ 2013년 12월 : 착공

□ 향후계획

○ 2016년 12월 : 준공 예정

사업명

남해스포츠파크 전지훈련시설 확충

담당자

체육시설사업소 황성호(☎860-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전지훈련 종합시설인 컨벤션센터를 조성하여 시서물 활용도 제고 및 타 지자체와

차별화된 스포츠마케팅 추진

○ 야구장 추가 조성으로 전국대회, 사회인 야구 등 대회 개최 및 전지훈련팀 유치를

통해 지역 경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년(4년간)

○ 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-1번지 일원

○ 규 모 : 컨벤션센터 건립 지상 3층, 연면적 2,000㎡(전략회의실, 체력측정실,

코치실, 재활치료실, 강의실, 세미나실, 스포츠용품점, 케페테리아,

기념품판매점 등), 야구장 조성 1면 13,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000	-	400	900	8,700
국 비	4,000	-	-	200	3,800
시 도 비	1,800	-	-	150	1,650
시군구비	4,200	-	400	550	3,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 5월 : 지방 재정 투․융자 심사(경남도)

□ 향후계획

○ 2014. 1월 ~ 6월 : 기본설계용역 추진

○ 2014. 8월 ~ 12월 : 실시설계용역 및 인허가 협의

○ 2015. 1월 : 공사 착공

○ 2016. 12월 : 공사 준공(예정)

사업명

당항마을 하수처리시설

담당자

환경수도과 정동관(☎860-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남면 당항리 일원에서 발생하는 오수가 미처리상태로 남해로 방류되어        수질오염을 가중시키고 있어 방류해역의 수질오염을 저감시키고, 쾌적한       생활환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 남해군 남면 당항리 일원

○ 규 모 : 하수처리장 200톤/일, 하수관거 L=12km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	9,500	200	700	1,520	7,080
국 비	6,700	-	490	1,064	5,146
시 도 비	1,400	-	105	228	1,067
시군구비	1,400	200	105	228	867
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2012. 3월 ~ 2012. 12월 : 기본 및 실시설계용역 발주 및 준공

○ 2013. 12월 : 공사착공

□ 향후계획

○ 2016. 12월 : 준공 예정

사업명

석평 소하천 정비공사

담당자

안전총괄과 박휘태(☎860-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 석평소하천은 하천폭이 좁고 단면이 협소하며, 특히 마을을 관통하는 미정비된 소하천으로 남해군소하천정비종합계획에 의한 체계적인 하천정비를 통해 재해로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ～ 2015 (3년간)

○ 위 치 : 남해군 이동면 석평리 일원

○ 규 모 : 하천정비 L=1.23km, B=9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,800	-	602	1,758	2,440
국 비	2,400	-	301	879	1,220
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400		301	879	1,220
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   50%)

○ 13. 5월 : 공사착공

□ 향후계획

○ 14. 1월 : 1차분 준공

○ 14. 1월 : 2차분 착공

○ 15. 5월 : 공사 준공예정

11-2. 지방채 발행사업

우리 남해군에서 ‘13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

※ 우리 남해군에서 2013년도에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

11-3. 민간투자사업

우리 남해군에서 ‘13년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

※ 우리 남해군에서 2013년도에 추진한 민간투자사업은 없습니다.